				★과장			팀장	도로관리처장	도로관리본부장
문서번호		도로관리처-656
보존기간		준영구		협 조			팀장
결재일자		2017.01.26.
공개여부		공개
2017년 자동차전용도로 유지관리 계획
			2017. 1
						도로관리처

2017년 자동차전용도로 유지관리 계획

2017. 1.

도로관리처

Contents

Ⅰ.	일반방향	1
Ⅱ.	주요업무	4
Ⅲ.	2016년 추진실적	11
Ⅳ.	2017년 사업계획	12
Ⅴ.	안전관리 계획	18
Ⅵ.	직무교육 계획	20
Ⅶ.	행정사항	22

2017년 자동차전용도로 유지관리 계획

□ 재난예방 및 안전관리, 도로서비스 수준향상, 시민불편 최소화를  위한『2017년 자동차전용도로 유지관리 계획』을 수립하여 도로 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		일 반 현 황

관리시설

○ 관리노선 현황 : 11개노선, L=165.02㎞

도 로 명	구 간	차로	연장(Km)	관리게시일
계	11개 노선	4~8	165.02
올림픽대로	강일동시계 ~ 행주대교	8	42.5	‘95.01.01
동부간선도로	상계동 시계 ~ 청담대교 ~ 장지동시계	4~6	29.61	‘95.01.01 ‘99.09.14
강변북로	아차산대교 ~ 난지도 시계	4~8	29.43	‘95.01.01
서부간선도로	성산대교 남단 ~ 시흥대교	4	10.8	‘95.01.01
언주로	포이동 ~ 성남시계	4~6	4.35	‘98.06.22
북부간선도로	월곡동 ~ 구리시계	4~6	8.3	‘02.11.08
내부순환로	성산대교 북단 ~ 홍지문터널 ~ 성수동	4~6	22.0	‘99.01.28~ ‘99.12.11
국회대로	양평동 ~ 신월I.C	4	5.5	‘01.06.08
양재대로	수서I.C ~ 양재I.C	6~8	5.4	‘01.06.08
경부고속도로	한남대교 ~ 양재I.C	6~8	6.83	‘06.01.01
우면산로	선암I.C ~ 우면동시계	4	0.3	‘03.09

○ 관리시설물 현황

구 분	시 설 명	비 고
도로부속시설물 (18종)	방호울타리, 휀스, 난간, 과속방지시설, 충격흡수시설, 빗물받이, 낙석방지망, 법면, 현광방지시설, 보차도경계블럭, 다이크, 배수로, 우수맨홀, 방음벽, 도수로, 점검사다리 잠금장치, 미끄럼방지시설, 도로반사경 등
도로포장	165.02km(61,163a) 포장유지관리 전반 (포트홀 응급복구, 소파보수, 노후 포장정비) ※ 2015.01.01 자동차전용도로 통합관리
도로안전시설물 (6종)	델리네이터, 시선유도봉, 갈매기표지, 장애물표지판, 표지병, 도로중앙분리대 등
절개지	절개지 26개소(시특법 6)
도로표지 (4종)	경계표지, 이정표지, 방향표지, 노선표지
교통안전시설물 (4종)	주의표지-미끄러운 도로 등 / 규제표지-속도, 중량제한 등 / 지시표지-버스전용차로, 유턴 등 / 노면표시-천천히 등
불법광고물	자동차전용도로 165.02km / 한강교량 21개소
수방관리	올림픽대로 등 11개 노선 165.02㎞ (침수노선 교통통제 29.3㎞)

조직 및 인력 : 1처 2팀 85명

							도로관리처장
	시설팀(66명)																		포장팀(18명)
	․ 도로시설관리(18) ․ 도로순찰대(31) ․ 직영정비반(17)																		․ 도로포장업무(12) ․ 직영정비반(6)

※ 육아휴직 1명, 파견자 1명, 공로연수 1명 포함

차량 및 장비현황

○ 차  량                                             (단위 : 대)

계	승용차	더블캡 (1톤)	더블캡 (2.5톤)	덤프,카고 (5톤)	보온차 (5톤)	다목적세척차 (5톤, 8톤)	건설기계 (로더,롤러)
39	16	8	7	2	1	2	3

○ 장  비                                            (단위 : 대)

계	배 관 준설기	발전기	양수기	고 압 세척기	코아드릴	콤팩터	함마드릴	배 관 청소기	노 면 절삭기	도 로 캇타기	콤프래샤	전동해머
54	1	7	5	5	1	12	6	2	2	3	3	7

예산현황

○ 예산규모 : 40,829백만원                            (단위 : 백만원)

구 분	계	일반회계 (도로관리) (경상적 대행사업비)	특별회계 (자본적 대행사업비)
2017년	40,829	12,,113 * 수선유지 사업비 4,130	28,716

○ 예산사업 현황                                     (단위 : 백만원)

구 분	사 업 명	예산금액	비 고
15건	총 계	32,846
일반회계(도로관리) * 경상적 대행사업비 (6건)	소 계	4,130
	자동차전용도로 부속시설물 정비공사	1,570
	자동차전용도로 시설물 세척용역	1,300
	충격흡수시설 정비공사	700
	자동차전용도로 소규모 포장 보수공사	300
	도로표지 정비공사	200
	절개지 정밀점검용역	60	신규
특별회계 * 자본적 대행사업비 (9건)	소 계	28,716
	정릉천고가교외 1개소 교면포장개량	7,700
	북부간선고가교 교면포장 개량	3,700
	PSC교(두모교) 교면포장 개량	5,700	신규
	자동차전용도로 노후포장정비공사	7,000
	자동차전용도로 방호울타리 정비공사	2,000
	자동차전용도로 경계블럭 및 측구정비공사	1,500
	자동차전용도로 노면표시 유지보수공사	666
	노후도로 교통안전표지 정비	250	신규
	강변북로(신수동구간) 방음벽 정비	200	신규

Ⅱ		주 요 업 무

도로시설물 유지관리

○ 관리대상 시설물

구 분	시 설 명	비 고
도로부속시설물 (18종)	방호울타리, 휀스, 난간, 과속방지시설, 충격흡수시설, 빗물받이, 낙석방지망, 법면, 현광방지시설, 보차도경계블럭, 다이크, 배수로, 우수맨홀, 방음벽, 도수로, 점검사다리 잠금장치, 미끄럼방지시설, 도로반사경 등
도로안전시설물 (6종)	델리네이터, 시선유도봉, 갈매기표지, 장애물표지판, 표지병, 도로중앙분리대 등
절개지	절개지 26개소(시특법 6)
도로표지 (4종)	경계표지, 이정표지, 방향표지, 노선표지
교통안전시설물 (4종)	주의표지-미끄러운 도로 등 / 규제표지-속도, 중량제한 등 / 지시표지-버스전용차로, 유턴 등 / 노면표시-천천히 등
불법광고물	자동차전용도로 165.02km / 한강교량 21개소
수방관리	올림픽대로 등 11개 노선 165.02㎞ (침수노선 교통통제 29.3㎞)

○ 관리내용

- 파손, 노후시설물 보수 및 도색

- 배수로 및 지하차도 집수정 준설

- 시설물 세척 (터널, 지하차도, 방음벽, 각종 표지판 등)

- 시설물 안전점검 / 불법 광고물 정비

- 수방 및 제설대책 업무 등

○ 2016년 정비실적

- 시설물 정비 : 가드레일 보수 572경간, 가드레일 지주보수 244개,

방음판보수 551㎡,      시설물도색 242㎡,

경계블럭 보수 398m,    갈매기표지설치 240개 등

- 광고물 철거 : 7,793건 (현수막 2,724 한강교량 4,001 걸이식 311 부착식 757)

[파손시설물 정비]			[시설물 세척]

도로포장 유지관리

○ 포장관리 현황

- 노선별 현황 : 165.02km / 61,163a

구 분	계	올림픽 대로	서부 간선	언주로	제물 포길	양재 대로	경부 고속	우면 산로	동부 간선로	강변 북로	내부 순환로	북부 간선로	접속 램프
연장(Km)	165.02	42.50	10.80	4.35	5.50	5.40	6.83	0.30	29.61	29.43	22.00	8.30	(19.8)
면적(a)	61,163	16,091	2,817	750	1,760	3,117	2,732	75	9,081	11,032	6,047	1,605	6,056

- 형식별 분류 : 토공구간 / 구조물구간

구 분	계	토 공 구 간	시 설 물 구 간	비 고
연장(Km)	165.02	103.21㎞	61.81㎞
면적(a)	61,163	43,507a (71%)	17,656a (29%)

○ 포장 정비실적

- 포트홀 응급복구 실적 (직영시행) : 5년 평균 10,092개소

2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
10,790건	7,883건	15,323건	5,236건	6,682건	4,546건

- 노후포장 정비실적 (도급시행)

년 도	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	비 고
예산(백만원)	7,666	7,279	4,300	30,384	20,812	정비률= 정비면적/ 관리면적
정비면적(a)	1,465	2,288	1,242	5,038	3,841
정비률(%)	2.3	3.6	2.0	8.2	6.3

○ 포트홀 관리

- 24시간 응급복구체계 (평시) : 적출에서 응급복구 까지 24h 이내

포트홀	전화민원	⇒	작업지시	⇒	직영반 현장조사 및 응급복구	⇒	완료보고
	120접수
	순찰대 점검

- 6시간 응급복구체계 : 적출에서 응급복구 까지 6h 이내

• 운영시기 : 2일 이상 10mm/일 강우지속 등 포트홀 집중발생 예상 시

• 운영방법 : 책임 관리구간 6개 권역 지정 운영

※ 직영반, 순찰대 우선 운영 후 인력 부족 시 외주업체 추가 투입

- 포트홀 등급제 운영(2015년부터 운영) : 응급복구된 포트홀 효율적 사후관리

포트홀 발생	A:긴급	→ 응급복구	→ 즉시 소파 항구보수	⇒ 재발방지 ⇒ 효율적 보수
	B:보통		→ 순차적 노후포장 정비
	C:관찰		→ 지속관찰 후 후순위 정비

○ 예방적 포장보수 시행

- 우기전 예방 보수 : 예방적 소파보수, 상반기 노후포장

- 예방적 유지 보수 : 빗물 침투를 예방하는 균열보수, 표면처리 시행

균 열 보 수		표 면 처 리

○ 주요 포장파손 위치 집중관리 (‘17년 주요사업으로 추진)

- 반복 포장파손 구간 및 당해 연도 포장 예정구간에 대한 우선 순찰·보수

	< 집중 순찰·보수 >					< 후순위 점검확인 >
				→
∙ 반복 파손 및 배상민원 발생 구간					∙ 최근 재포장 시행 완료 구간
∙ 당해 연도 포장예정구간(보수필요 판단구간)					∙ 기존 권역별 순찰 대상 구간

종합상황실 운영

○ 상황실 운영

- 근무인원 및 형태 : 5명(24시간 상황유지 주간:2명/야간:1명)

- 운영내용

• 민원접수처리(서울시 응답소 등)    • 사고원인 파악 및 조치

• 긴급 상황 출동지시 및 기관 통보   • 순찰 적출사항 관리

• 365일 모든 현장(사고,공사장 등) 통합 상황유지

○ 자동차전용도로 통합 상황유지

‣ 취약 시간대(야간, 휴일) 자동차전용도로상 모든 현장 작업현황 관리

- 대 상 : 순찰대, 직영정비반(포장반, 세척반, 가로등정비반, 청소반, 녹지반),

연간단가업체 및 도로상 타기관 소관 작업현장

※ 현장 기능별 작업내용은 담당 부서별 통제에 의거 시행

- 방 법 : 본부내 일일 직영반 일상유지 순찰․점검 일정파악 관리 및 직영정비반

시간대별 작업상황에 대한 TRS 무선연동 시행

종합상황실 → 노선별 순찰대,직영정비반 → 환경처(목동) 상황실 → 종합상황실                 (근무위치/장비/인원/이동계획 등)

‣ 전용도로내 연간단가 등 일일 작업현황 관리(ETIS 일일상황보고 활용)

‣ 전용도로내 시행 또는 인접공사장(타기관 소관) 작업현황 파악 및 관리

도로순찰대 운영

○ 순찰대 운영개요

- 근무인원 및 형태 : 24명(24시간 순찰점검 상황유지)

• 평일 주·야간 : 2~3개조 4~6명 (10~12명/일)

• 토·일·공휴일 주·야간 : 2개조 4명 (8명/일)

- 순찰장비 : 차량 총 7대(산타페3대,쏘렌토4대), 스마트폰 6대, TRS 8대

- 순찰횟수 : 11개 노선 165.02Km (주간1.5회, 야간1.5회)

- 순찰거리 : 1,440Km/일 (1개조 평균 240Km/일) *16년 기준

- 점검내용

• 도로시설 파손 유무 확인 (이상 발생시 보수예정 깃발 설치 및 담당자 유선통보)

• 교통 지장물 제거 및 적출    • 환경 및 미관저해 사항 확인

• 도로패임 발생시 응급 조치   • 불법주정차 차량 및 잡상인 계도

• 공사장 안전관리 실태 파악   • 사고발생시 긴급안전조치 및 고장차량 편의 제공

○ 적출사항 처리체계

○ 최근 3년간 순찰 및 민원처리 실적                       (단위 : 건)

구 분	2014년	2015년	2016년	비 고
순찰적출	10,4870	12,833	10,774	시설물파손, 낙하물, 포트홀, 불법광고물․ 상행위 ․ 주정차, 청소상태 등
민원처리	2,416	2,414	2,630	다산콜, 서포터즈 제보, 타기관 통보, CCTV 확인

수방대책

○ 수방기간 및 현황

- 기    간 : 5. 15 ~ 10. 15 (5개월)

- 관리구간 : 자동차전용도로 11개 노선 165.02Km

- 침수도로 현황 : 3개 노선 29.3㎞

[올림픽대로 : 3.4㎞]

한강 인도교	팔당방류량(㎥/S)	침수예상 구간	경찰서
6.33m	10,500	여의상류I.C (L = 0.8㎞)	영등포, 동작
6.45m	12,500	여의하류I.C (L = 0.3㎞)	영등포
7.33m	12,800	여의상류I.C～하류I.C (L = 1.8㎞)	영등포, 동작
8.03m	15,200	한강철교 하부 (L = 0.5㎞) ※ 올림픽본선	동 작

[강변북로 : 0.8㎞]

한강 인도교	팔당방류량(㎥/S)	침수예상 구간	경찰서
7.49m	15,200	한강철교 하부 (L = 0.8㎞)※ 강변북로 본선	용산, 마포

[동부간선도로 : 25.1㎞]

한강 인도교	팔당방류량(㎥/S)	침수 예상구간	경찰서
7.49m	12,000	용비교~성동교 (상행 1.7㎞, 하행 1.7㎞)	노원,중랑, 종암,광진, 성동,동대문
7.81m	13,000	성동교~중랑교 (상행 6.9㎞, 하행 6.4㎞)
10.92m	25,000	중랑교~월계1교 (상행 4.1㎞, 하행 4.3㎞)

○ 자동차전용도로 침수관리 FLOW

수위관측			•상황유지
침수수위 1.5m전			•교통통제 안내시설 비치 확인(사전비치) •경찰청에 경계수위 도달 통보 •도로복구(청소)반 출동준비
침수수위 1.0m전			•경찰청에 위험수위 도달 통보 •경찰서 차량통제 및 교통통제 안내간판 설치 •도로복구(청소)반 출동 및 현장대기
침 수			•수위관측 계속
	수위하강
도로복구			•침수도로 뻘․부유물 제거 및 청소 실시
통제해제			•침수수위 상승 등 현장여건 검토 후 차량통행 (경찰서와 협조)

○ 단계별 근무체계 (평시∼3단계) * 2016년도 수방대책 기준

단계	판단기준	상황 지휘	근무인원		근무내용
			재난예방 (도로관리처 주관)	재난복구 (도로환경처 주관)
평시 (관심)	ㆍ징후감시 필요시 ㆍ예방활동 필요시	상 황 근무자	ㅇ 근무인원 17명 - 상황총괄반 1명 - 기전관리반 10명 - 순찰반 6명	ㅇ 근무인원 30명 - 상황총괄반 1명 - 청소반 28명 - 정비반 1명	ㅇ상황유지 및 예방 활동
포트홀 단계 (예방)	ㆍ강우량 10㎜/일 이상 예보 시 ㆍ2일이상 지속강우 시	상 황 근무자	ㅇ 근무인원 42명 - 상황총괄반 2명 (순찰상황1,포장1) - 현장조치반 24명(6개반) - 기전관리반 10명 - 순찰반 6명	ㅇ 근무인원 30명 - 상황총괄반 1명 - 청소반 28명 - 정비반 1명	ㅇ 권역별 응급복구반 편성 ㅇ 6개 책임관리권역별 순찰 및 포트홀 응급복구 ㅇ 포트홀 발생 및 복구 현황정리
보강 (주의)	· 강우량 30㎜/일 이상 예보 시	상 황 근무자	ㅇ 근무인원 26명 - 상황총괄반 2명 (순찰상황1,포장1) - 현장조치반 4명(1개반) - 기전관리반 14명 - 순찰반 6명 ※ 포트홀 응급복구반 별도	ㅇ 근무인원 31명 - 상황총괄반 2명 - 청소반 28명 - 정비반 1명	ㅇ기상상황 감시 및 도로관리처 상황판단회의운영 ㅇ지하차도관리반 순찰 - 강북2, 강남2 ㅇ도로패임 응급복구 ㅇ취약구간 청소작업 실시 (도로환경처)
1단계 (주의)	ㆍ호우주의보 발령 시 - 6시간 70㎜ - 12시간 110㎜ 이상 예보 ㆍ한강대교 수위 4.5m 도달 시 ㆍ태풍주의보(순간 풍속 20m/s)	상 황 반 장	ㅇ 근무인원 41명 - 상황총괄반 5명 (반장,순찰상황1,시설1, 기전1,포장1) - 현장조치반 8명(2개반) - 기전관리반 22명 - 순찰반 6명	ㅇ 근무인원 35명 - 상황총괄반 2명 - 순찰반 2명 - 청소반 28명 - 녹지직영반 2명 - 정비반 1명	(보강단계 업무 계속 수행) ㅇ경기북부강수량, 팔당댐 방류량 확인 ㅇ한강대교 등 하천수위 확인 ㅇ지하차도 기전설비 점검 ㅇ배수불량구간 긴급 준설 (도로관리처) ㅇ교통통제 안내시설 설치 준비 ㅇ침수대비 복구업무 준비
2단계 (경계)	ㆍ호우경보 발령 시 - 6시간 110㎜ - 12시간 180㎜ 이상 예보 ㆍ홍수주의보 - 한강대교 수위 8.5m 예상 시 ㆍ태풍경보(순간풍속 26m/s, 총강우량 200㎜이상) · 집중호우 등 필요시 자체발령	처 장	ㅇ 근무인원 80명 - 상황총괄반 8명 (처장,반장,순찰상황1,시설2, 기전2,포장1) - 사면점검반 2명 - 수위관측 교통통제반 16명 · 동부간선도로 4명(도로시설처) · 여의상류IC 4명(도로관리처) · 여의하류IC 4명(도로시설처) · 강변북로 4명(교통정보처) - 현장조치반 12명(3개반) - 기전관리반 34명 - 순찰반 8명(통제점검 2명 포함)	ㅇ 근무인원 39명 - 상황총괄반 2명 - 순찰반 4명 - 청소반 28명 - 녹지직영반 4명 - 정비반 1명	(1단계 업무 계속 수행) ㅇ수위관측 및 교통통제반 배치 ㅇ의정부 신곡교 수위확인 ㅇ팔당댐 및 한강 인도교 등 하천수위 확인 ㅇ사면 순찰 및 점검 ㅇ침수도로 교통통제 준비 (경찰 협의, 안내간판 설치 등) ㅇ지하차도 배수펌프 가동 확인 ㅇ임대장비 대기 검토(양재대로) ㅇ침수도로 복구조 현장대기
3단계 (심각)	ㆍ홍수경보 발령 시 - 한강대교 수위 10.5m 예상 시 ㆍ이재민 다수 발생	본부장	ㅇ 근무인원 102명 - 상황총괄반 14명 (본부장,처장,반장,순찰상황1, 시설3,기전4,포장3) - 사면점검반 2명 - 수위관측 교통통제반 16명 · 동부간선도로 4명(도로시설처) · 여의상류IC 4명(도로관리처) · 여의하류IC 4명(도로시설처) · 강변북로 4명(교통정보처) - 현장조치반 22명(5개반) - 기전관리반 40명 - 순찰반 8명(통제점검 2명 포함)	ㅇ 근무인원 77명 - 상황총괄반 2명 - 순찰반 9명 - 청소반 56명 - 녹지직영반 8명 - 정비반 2명 ※ 도로침수 등 필요시 전 직원 비상근무	(2단계 업무 계속 수행) ㅇ필요시 가용인력 전원 동원 ㅇ장비임대업체 장비 동원 ㅇ수해위치 및 유형별 총력 대처 ㅇ필요시 타기관 지원 요청 ㅇ피해상황 집계 및 복구방안강구

Ⅲ		2016년 추진실적

	2016년 추진사업 총평
□ 안전분야 시설개선 사업추진 노력강구 ➠ 전용도로 안전사고 제로화 / 2차사고 없는 도로조성 / 사고다발구간 개선 등 □ 효율적 ‘도로포장 관리’ 기반마련 ➠ 교면포장 유지관리 기준마련 / 지하차도 포트홀 보수방법 개선

예산사업 추진실적 (15개사업, 31,444백만원)

(단위 : 백만원)
총 계	시설물 정비			포장 정비			기술용역 (방음벽)
	소계	단위공사	연간단가	소계	단위공사	연간단가
15건	9건	5건	4건	5건	2건	3건	1건
31,444	9,867	6,210	3,657	21,478	14,330	7,148	99

○ 일반회계(도로관리) : 6건,  4,056백만원

- 시설물 및 소규모포장 일상 유지보수(연간단가) : 5건, 3,957백만원

- 방음시설 노후현황 조사분석 용역 : 1건, 99백만원

○ 특별회계(대행사업) : 9건, 27,388백만원

- 노후포장 및 노면표시 일상 유지보수(연간단가) : 2건, 6,848백만원

- 노후시설물 정비(단위공사) : 5건, 6,210백만원

- 교면포장 개량(단위공사) : 2건, 14,330백만원

주요사업 추진실적 (8개사업)

구 분	사 업 명	추진실적
핵심사업 (5건)	자동차전용도로 안전사고 Zero화	- 교통안전시설 및 개인안전장구 성능개선 - 전용도로 공사장 교통관리 매뉴얼 작성
	선제적 개선을 통한 2차사고 없는 안전한 도로조성	- 2차사고 위험구간 17개소 시설개선 공사시행
	감독권한 분산 등을 통한 부정부패 제로	- 도로관리본부 청렴결의대회 및 간담회 시행 - 실정보고 심의위원회 운영(7회)
	공공디자인을 적용한 감성적 도로경관 개선	- 공공디자인 적용을 위한 서울디자인재단 협업 시행 후 개선안 터널 1개소 공사시행,
	교면포장 유지관리 기준 마련	- ‘교면포장 시공품질관리 개선 학술용역’ 시행 - 개선방안 10개 항목 도출 및 현장적용
일반사업 (3건)	지하차도 포트홀 보수방법 개선	- 외부전문가 자문을 통한 포트홀 보수방법 개선 ※ ‘15년(213개) 대비 ‘16년(104개) 포트홀 51% 저감
	야간공사장 VOC 저감	- 교통정체, 소음, 단차저감을 위한 개선시행 ※ ‘15년(164건) 대비 ‘16년(67개) 민원 59% 저감
	도로전문성 강화	- 도로관련 외부행사 참여를 통한 전문역량 강화 - 도로체험벨트 구축(벤치마킹 프로그램 개발)

Ⅳ		2017년 추진계획

시설관리 기본방향

시설물 관리계획 (직영관리 및 도급 예산사업 15건, 32,846백만원)

○ 시설물 분야

직영 관리			∘일상정비 : 민원사항 해소, 2차사고 방지 등을 위한 시설물 일상정비 ∘환경정비 : 방음벽, 방호울타리, 시선유도봉 시설물 세척 등 환경정비 ∘재해예방 : 우기철 배수시설 준설, 부유물 제거 등 체수구간 관리 등
도급 관리 (9건) 7,780 백만원			공 사 (7건)			연간단가 (3건)	∘도로부속시설 유지보수 (1,570백만원) ∘충격흡수시설 유지보수 (700백만원) ∘도로교통표지 유지보수 (200백만원)
						단위공사 (4건)	∘노후 방호 울타리 정비 (2,000백만원) ∘노후 경계브럭·측구정비 (1,500백만원) ∘노후 교통안전표지 정비 (250백만원) ∘노후 방음시설 정비 (200백만원)
			용 역 (2건)			연간용역 (1건)	∘도로시설물 세척 (1,300백만원)
						단위용역 (1건)	∘절개지 정밀점검 (60백만원)

○ 도로포장 분야

직영 관리		∘일상정비 : 소규모 포장복구 및 도로 균열보수, 표면보수 등 ∘안전활동 : 우기철 도로 포트홀 응급보수 등 ∘재해예방 : 배수구 결빙 및 지하차도 고드름 제거 등
도급 관리 (6건) 25,066 백만원		공 사 (6건)			연간단가 (3건)	∘토공 노후포장 유지보수 (7,000백만원) ∘소규모 포장보수 유지보수 (300백만원) ∘노면표시 유지보수 (666백만원)
					교면포장 단위공사 (3건)	∘정릉천고가외 1 교면포장개량 (7,700백만원) ∘북부간선고가 교면포장개량 (3,700백만원) ∘PSC교(두모교) 교면포장개량 (5,700백만원)

직영/도급 중점 관리방안

○ 직영관리 : 연중 지역·기능별 구분 책임관리 시행 / 계절적 특성에 맞는 맞춤형 정비시행

○ 도급관리 : 조속한 설계·발주 및 철저한 공정관리를 통한 예산 조기집행

- 연간단가공사 : 2∼3월 공사착공 / 12월 중순 공사준공

- 단위공사 : 5월 공사착공 / 11월限 공사준공

구 분		월 별 구 분
		1월		2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
직영관리
도급	연간단가
	단위 공사

계약

현장조사

공사설계

계약심사

입찰공고

착공

공사마무리

정산

파손시설 정비 등 작업지시에 따른 공사시행

준공

현장조사

공사설계

제설근무

봄맞이 환경정비

우기대비 준설

우기철 포트홀 보수, 배수시설 정비, 수방근무

추계 환경정비

년중 시설물 일상정비, 세척 등 환경정비, 포트홀보수, 재해예방 활동

입찰공고

계약심사

계약

착공

정산

공사마무리

준공

공정관리계획에 의한 공사시행

2017년 부서 경영전략

도 로 관 리 본 부		핵심 가치				시민에게 신뢰받는 "안전하고 쾌적한 도로관리” 투명하고 공정한 업무처리로 “부정부패 Zero”
도로 관리 처		미 션				"시민 니즈 및 사회적 요구에 선제적 대응하는 " 도로관리 시스템 구축
		비 전				"시민과 함께 공유하는" 안전하고 효율적인 자동차전용도로
		경 영 목 표				대형 안전사고 Zero / ‘시민을 위한’ 고객만족경영 실천 유지관리 효율성 제고
사업계획			안전경영	【핵심】도로포장 등급제 관리로 안전사고 Zero화				‘도로시설처’ 협 업
				【일반】자동차전용도로상 잠재위험(Risk) 관리시스템 구축				‘도로시설처’ 협 업
				【일반】자동차전용도로 안전사고 저감추진				‘도로관리본부’ 공통과제
			고객만족경영	【핵심】운전자에게 명확한 정보제공을 위한 전용도로 교통안전표지 정비
				【일반】운전약자(여성,노인)을 배려하는 도로시설 개선				‘시민단체’ 협 업
				【일반】교통사고·도로이용정보 등의 빅데이터 공유를 통한 시민 편익제공				‘교통정보처’ 협 업
			효율경영	【일반】램프, 접속부 등 포장관리 취약구간 맞춤형 정비
				【일반】구조물 안전을 고려한 건설공사 방법 개선				‘도로시설처’ 협 업

2017년 주요사업 세부계획

(1) 도로포장 등급제 관리 - ‘도로시설처 협업과제’
	❖ 사업목표 - 포트홀, 포장노후 등 취약구간에 대한 관리지도를 만들어 등급제 집중관리 함으로써 안전사고 저감【포장 파손으로 인한 배상 민원 전년대비 30% 감소】 ❖ 추진계획 - 포장정비이력 및 위험도 분석 - 포트홀 유형별 분류 및 관리지도 작성 - 시계열 관리시행(주기적 예방조치, 선택적 집중보수)

(2) 자동차전용도로상 잠재위험(Risk) 관리시스템 구축 - ‘도로시설처 협업과제’

❖ 사업목표

- 자동차전용도로상 잠재적인 위험요인의 예방적인 관리를 통해 이용시민에게 365일

안전하고 쾌적한 도로환경을 제공하고자 함.

【잠재위험】화재, 도로함몰, 시설물추락 등 사고발생시 2차사고 유발 파급효과가 큰 위험요인

❖ 추진계획

- 잠재위험 대상선정 및 관리기준 마련 (전문가 자문)

- 잠재위험 관리강화(유관기관 협의 및 공사단계별 점검)

(3) 자동차전용도로 안전사고 저감추진

❖ 추진배경

- ‘16년 싸인보드 시인성개선 등 교통 안전사고 저감을 위한 노력에도 불구, 고속주행

도로상 작업하는 자동차전용도로의 열악한 도로·교통여건으로 크고작은 안전사고

지속발생 ➠ 최근 3년간 연평균 교통사고 18건 발생

❖ 추진계획

- 피해사고 예방대책 : 차량후방 접촉·추돌 피해사고 예방을 위해 노후차량 및

교통안전시설 시인성 향상, 성능개선 추진

- 가해사고 예방대책

· 인적원인 : 직원 교통안전 교육 및 졸음방지용품 차량비치 등 인적 Risk 해소 노력

· 물적원인 : 차량 대형화로 발생하는 사각지대 등 물적 사고요인 발굴 개선

(4) 운전자에게 명확한 정보제공을 위한 전용도로 교통안전표지 정비

❖ 사업목표

- 중복·난립하게 설치된 교통안전표지에 대한 일제정비 시행

- 교통안전표지 설치현황

【중복·난립 교통안전표지】

구 분	수 량	관리기관 변경		규제기관
		기 존	현 재
교통안전 표 지	3,608개	서울지방경찰청→ 도로사업소(‘08년)	시설공단 (2011년∼)	서울지방 경찰청

❖ 추진계획

- 노선별 세부 현장조사 후 도로교통 전문업체 기술용역을 통한 정비방안 마련

- ‘17년 예산(250백만원) 범위내 시설개선 및 효과분석 모니터링 실시

(5) 운전약자(여성,노인)을 배려하는 도로시설 개선
	❖ 사업목표 - 운전약자(여성,노인)의 시각에서 사고요인 및 불편사항 등 개선 사항을 발굴·개선하여 시민 고객만족 및 안전한 도로환경 조성 ❖ 단계별 추진계획 - 1단계 : 협업시행 시민단체 선정 - 2단계 : 합동 순찰·점검 시행 - 3단계 : 의견수렴 간담회 개최 (개선방안 도출) - 4단계 : 개선방안 시설개선

(6) 교통사고·도로이용정보 등의 빅데이터 공유를 통한 시민 편익제공 - ‘교통정보처 협업과제’
	❖ 사업목표 - 자동차전용도로 관리중 축적된 도로·교통관련 빅데이터(교통사고 다발구간, 진출램프 차로안내 등) 자료를 네비게이션 업체에 사전 정보제공하여 시민 편익증진 및 공단 이미지 제고에 기여 ❖ 단계별 추진계획 - 1단계 : 도로·교통관련 빅데이터 분석 및 정보화 작업 - 2단계 : 네비게이션 업체와 업무협약(MOU) 체결 및 정보제공 - 3단계 : 빅데이터 정보운영 모니터링 및 업그레이드

(7) 램프, 접속부 등 포장관리 취약구간 맞춤형 정비

❖ 사업목표

- 전면통제에 따른 민원, 포장공사의 어려움 등으로 그간 포장 일괄정비에서 소외되었던

램프, 접속부에 대한 상태조사 후 연차적 정비를 통한 도로포장 서비스 향상

❖ 추진배경

- 본선 중심의 노후포장정비로 램프 등 관리 취약구간 발생

공용수명 초과에 따른 거북등 균열	시설물 불량에 따른 반복 포장파손

❖ 추진계획

- 취약구간 포장상태 조사 및 불량구간 계량적 분석

- 포장상태 등급 평가로 정비 우선순위 결정

- 도로여건을 고려한 맞춤형 포장정비 실시 (외부전문가 자문 등)

(8) 구조물 안전을 고려한 건설공사 방법 개선
	❖ 사업목표 - 자동차전용도로상 진행되는 구조물 공사의 대형 건설장비가 구조물에 미치는 영향을 검토하여 도로 및 교량의 구조적 안전성 확보 ❖ 추진배경 - 구조물 공사시 중장비 집중에 따른 내구성 검토필요 ➠ 중장비 운영방안 마련 필요 ❖ 추진계획 - 현장별 해당 시설물의 구조적 안정성 검토 - 시설물의 안정성 확보 및 품질을 고려한 효율적인 장비배치 검토 - 건설장비로 인한 영향이 최소화 될 수 있는 장비 운영계획 수립

Ⅴ		안전관리 계획

추진방향

시민에게 신뢰받는 “안전하고 쾌적한 도로관리”

지속적인 유지관찰 및 점검실시	점검결과 위해요인 신속한 보수조치	시스템 입력 등 시설물 이력관리

관련근거

○ 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제7조, 제12조

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법(이하 시특법) 제4조 및 제6조

○ 급경사지 재해예방에 관한 법률(이하 급경사지법) 제5조

안전점검 인력 및 차량/장비

○ 점검인력 : 총 82명  ※ 육아휴직 1명, 파견자 1명, 공로연수 1명 제외

○ 점검차량 : 총 39대  ※ 승용차 16대, 화물차 및 건설장비 23대

○ 점검장비 : 총 56종  ※ 반발경도 측정기, 균열측정 현미경, 산소농도 측정기 등

시설물 유지관리 체계

특별점검			정기점검			긴급(상황)점검
			이상 및 결함 발견
				긴급초지		시공업체 및 직영반 초동조치
보수 불필요		No	보수,보강 필요성 검토
			유지보수계획 수립 및 시행
지속적인 유지관찰					안전성확보 필요시
			일반유지보수			정밀안전진단실시
			유지보수 공사 시행
			효과의 확인
			보수완료

안전점검 실시계획

구 분	점검시기	점검대상	점검자	점검방법
일상점검	연중 24시간	도로포장, 도로부속물, 교통안전시설,절개지 등	순찰대 상시 순찰 [2~3개조(4~6명)]	순찰차량 이용 육안점검
정기점검	1분기-2월 (해빙기 대상시설 등)	도로포장, 도로부속물, 교통안전시설, 절개지 도로·교통안전표지 등 (전용도로 인근 타기관 공사장 포함)	도로관리처 직원 (필요시 정비반 협조)	육안 및 휴대장비를 이용한 점검
	2분기-5월 (풍수해 대상시설 등)
	3분기-8월 (가을철 대상시설 등)
	4분기-11월 (동절기 대상시설 등)
특별점검	설 대비(1월) 추석대비(9월)	특별점검 대상	도로관리처 직원 (필요시 정비반 협조)
긴급점검	긴급점검 사유 발생 시	긴급점검 대상
정밀점검	점검빈도에 따른 계획점검	시특법대상시설 ※‘15년 정밀점검 용역결과 C등급(1개소)	외부전문기관 점검시행	외부전문기관 점검 시행

안전점검 결과 조치계획

○ 단순하거나 경미한 사항 : 점검즉시 현장조치 또는 직영반 활용 신속조치

○ 근본적 보수 필요한 사항 : 연간단가업체 작업지시하여 보수조치

○ 안전상 위험이 있는 사항 : 긴급 안전조치 후 정밀점검 및 정밀안전진단

결과에 의거 보수보강 시행

점검결과 시스템 입력 및 시설물 이력관리

○ 시특법 대상시설 : FMS(시설물정보관리 종합시스템)

○ 급경사지법 대상시설 : 市 재난관리시스템 (서울시 입력요청)

○ 도로포장 및 맨홀 : PMS(도로포장 관리시스템)

Ⅵ		직원교육 계획

추진방향

“기본에 충실하고 전문성을 보유한 창조적 인재”

안전사고 및 비상사태 등 유사시 대처능력 향상	전문지식 습득을 통한 도로관리 직무 역량강화	관련분야 타기관 성과공유 및 벤치마킹
내부 자체교육	외부 위탁교육	견학 및 연수

오토캐드 초급, 중급 교육 (인재개발원 주관 직무교육)

- 제공기관 : WeMade I&C (전산정보팀 유지보수업체)

- 시행기간 : 2017. 3월 ~ 12월

- 교육내용 : 오토캐드 초급(4회), 중급(4회)  □□□ 각 2일 과정

외부 위탁교육

구 분	건설기술자 최초교육	도로포장공사 전문기술교육	정밀안전진단 기술자교육 (교량 및 터널반)	지방공기업 예산실무 교육
인 원	10명	2명	2명	1명
대 상	신입직원 및 최초교육 미이수자	전문기술교육 미이수자	진단기술교육 미이수자	운영파트 직원
시 간	5일(35hr)	3일(21hr)	10일(70hr)	5일(35hr)
시 기	2017.1~12월 중	2017.1~12월 중	2017.1~12월 중	2017.4월/9월
기 관	건설기술교육원	서울시품질시험소, 한국도로공사	한국시설안전공단	지방공기업평가원
비 고	비합숙 (인천,역삼동,신설동)	비합숙(우면동) 및 합숙(동탄)	합숙 (진주)	비합숙 (종로)

토목 학술대회 참석

- 기   관 : 대한토목학회, 한국도로학회 등

- 기   간 : 2017년 內 1회 이상 참가예정

- 인   원 : 각 회당 2~4명

- 효   과 : 토목 및 도로 관련분야의 다양한 동향 및 연구성과 등 습득

청렴 내재화를 위한 특별 청렴교육

- 교 육 명 : 찾아오는 청렴 교육

- 일    정 : 2017. 상․하반기          * 세부 일정 등은 추후 청렴연수원과 협의

- 교육기관 : 국민권익위 청렴연수원

- 장    소 : 서울시설공단 회의실

- 대    상 : 도로관리처 전직원(82명)

- 교육특성 : 청렴연수원 소속 교수 초빙, 부서 전원 집체교육

안전관련 특별교육

○ 안전결의대회

- 일   시 : ‘17.2.3(금) ~ 2.4(토)

- 대   상 : 도로관리처 본사 직원(29명)

- 장   소 : 경기도 가평군 연인산

- 내   용 : 안전사고 저감대책 마련 및 안전교육 / 안전기원제

○ 수방대책 안전 워크숍

- 일   시 : ‘17. 5월 中 예정

- 대   상 : 도로관리처 전직원(82명)

- 장   소 : 추후 협의

- 내   용 : 수방대책 안내, 수방대책 당부사항 전파 및 안전 교육 등

도로관리처 부서장 주관 교육

- 교육주기 : 월 1회    * 감사․외부기관 점검 등 현안 발생시, 수시교육

- 교육내용 : 도로부문 주요 시책방향, 안전, 청렴, 인성, CS, 성희롱 예방 등

- 교육대상 : 본사직원 전원

Ⅶ		행 정 사 항

○ 본 계획서 市(도로시설과) 제출

○ ‘2017년 예산사업’ 원활한 사업추진 철저

- 조속한 설계·발주 및 철저한 공정관리 등 단계별 원활한 사업추진 관리

○ ‘2017년 주요사업’ 담당자별 세부 추진계획 수립·시행

- 세부 추진계획 방침수립(‘17.2월限) 및 단계별 사업추진 일정 준수

○ ‘2017년 수방대책’ 별도 방침 수립·시행

- 유관기관 간담회 및 합동 모의훈련계획 포함 시행.

○ ‘직원교육 계획’ 본부내 처별 공유 및 합동교육 실시

- 각 처별 교육계획 공유 및 필요시 합동교육 계획수립 시행.  끝.