「저류지 설계,시공,관리기준 수립용역」

과 업 지 시 서(안)

2016. 7.

SH공사 택지사업처

(택지설계부)

목   차

Ⅰ.	과업 개요	1
Ⅱ.	과업 내용	1
Ⅲ.	과업의 추진	3
Ⅵ.	과업수행지침	4
Ⅴ.	과업특수조건	7

Ⅰ		과업 개요

1. 과업명 : 「저류지 설계, 시공, 관리기준 수립 용역」

2. 과업기간 : 계약일로부터 120일

3. 사업예산 : 금 19,800천원(부가세면세, 제비용 포함)

4. 과업목적

○ 우리공사, 타기관 및 해외 우수의 저류지 활용사례 조사

○ 도시내 생태공간 또는 주민편익공간으로서 저류지의 활용방안 제안

○ 수리수문 기능과 공원·휴게 기능을 구분하기 위한 구조 제안

○ 저류지를 지역주민편익 공간으로 활용하는 방안 제안

○ 위의 검토, 제안 사항을 모두 반영한 설계, 시공, 관리기준 수립

Ⅱ		과업 내용

1. 일반사항

○ 개요 : 설계개념과 적용, 관련법제 및 기준, 설계과정

○ 현황조사

- Case study : 국내 친환경 저류지, 해외 저류지 사례 검토 및 적용방안

- 주변환경 조사분석 : 주변하천 연계방안, 접근성, 개방감

- 자연환경, 인문․사회환경, 경관, 토양, 수리수문학적 현황 조사분석

○ 우리공사 사업지구(고덕강일, 구룡마을 개발 등)의 저류지를 생태환경공간또는 주민편익공간으로 조성키 위한 접목 검토 및 협의

2. 설계기준

○ 구조물 설계 (수리수문․수방 기능과 공원·휴게 기능을 구분한 구조)

- 수리수문 및 수방 구조물

- 공원, 휴게공간 확보 구조물

- 생태공간 확보 구조물

○ 시설물 설계

- 수방시설물, 피난 및 안전 시설물

- 놀이, 휴게, 운동, 수경, 관리, 환경조형, 경관조명, 급․관수시설 등

○ 지반설계

- 부지조형(비탈면, 마운딩)

- 식재지반(생육토심, 배수시설, 관수시설, 인공지반식재)

○ 식재설계

- 수목식재, 잔디․초화류 식재, 비탈면 녹화, 실개천 및 생태연못

○ 기타 생태저류지 조성을 위해 필요한 제반 설계

2. 시공기준

○ 구조물 공사 (수리수문․수방 기능과 공원·휴게 기능을 구분한 구조)

- 수리수문 및 수방 구조물

- 공원, 휴게공간 확보 구조물

- 생태공간 확보 구조물

○ 시설물 공사

- 수방시설물, 피난 및 안전 시설물

- 놀이, 휴게, 운동, 수경, 관리, 환경조형, 경관조명, 급․관수시설 등

○ 지반공사

- 부지조형(비탈면, 마운딩)

- 식재지반(생육토심, 배수시설, 관수시설, 인공지반식재)

○ 식재공사

- 수목식재, 잔디․초화류 식재, 비탈면 녹화, 실개천 및 생태연못

○ 기타 생태저류지 조성을 위해 필요한 제반 공사

3. 관리기준

○ 구조물 관리, 시설물 관리, 수목 관리

Ⅲ		과업의 추진

□ 과업 보고

○ 본 과업의 계약 상대자는 과업 수행에 따른 결과물을 다음의 일정에 맞추어 발주처에 보고하여야 하며, 보고서 작성 과정에서 항상 발주처와 긴밀한 협의를 하여야 한다.

구분	일정	보고내용
착수보고	계약 후 5일 이내	* 세부 과업수행에 관련된 보고 과업 수행 방향 및 방법 분야별 참여 인력 및 조직 편성표 과업 세부 수행 계획표 기타 과업 수행에 필요한 사항
중간보고	용역 착수 후 2개월 이내, 1회 이상	* 업무 협의 및 진행 상황 보고 설문 조사 또는 자료 수집 완료시 각 수행단계별 자문회의 개최시 운영계획 등 각종 계획 수립시
수시보고	발주처의 요구가 있을시	* 공정 보고 및 진행 현황 보고 - 공사가 필요하다고 요청하는 경우
최종보고	용역 준공 5일 전	* 최종적인 연구 성과를 보고서로 인쇄하기 전

※ 자문위원회 구성 및 활용

- 과업수행 중 각 분과별 자문위원 위촉 및 자문

- 기존 컬쳐밸리 외부자문단 활용 및 관련 업계 전문가 활용

□ 보고서 및 성과품 제출

구 분	제출시기	제출수량	비 고
중간보고서	용역착수후 2개월 이내	5부	과업 중간연구결과
최종보고서 및 요약보고서	준공시	각 20부	CD 10매 별도제출 (HWP, EXCEL)

※ 1. 최종 보고시 프로젝트 진행과정에서 수집한 업무관련 자료와 각종 산출내역 등을 바인더로 정리하여 별도 제출(CD 1매 별도)

2. 용역준공 후에 성과품의 오류에 대한 감독자의 수정․보완요구가 있을 때에는 이에 따라야 하며 이에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담

Ⅳ		과업수행지침

□ 일반 지침

○ 용역수행기관은 계약일로부터 5일 이내에 세부업무별 담당자 명단, 추진일정․계획을 작성하여 발주처에 제출하여야 하며, 동 계획에 의거 전체 업무를 차질이 없도록 수행하여야 한다.

○ 용역수행기관은 발주처에 업무수행 경과 보고시 발주처가 제시한 의견을 적극 반영하여 업무를 수행한다.

○ 용역수행기관은 본 업무수행을 위해 학식과 경험을 가진 전문인력을 충분히 확보하여야 하며, 동 전문인력은 자기가 가진 지식과 경험을 최대한 활용하여 본 과업의 목적을 달성하도록 하여야 한다.

○ 본 과업내용서에 명시되지 않은 사항은 발주처와 협의하여 결정하며, 협의가 이루어지지 않는 사항은 발주처의 의견에 따라야 한다.

□ 계약 변경 조건

○ 다음 경우에 한하여 발주처의 승인을 얻어 과업기간을 변경할 수 있다.

- 발주처의 방침에 의하여 과업수행이 연장되거나 중단될 경우

- 발주처의 계획변경으로 과업내용이 변경 또는 증감될 경우

- 천재지변 및 기타 불가항력으로 인하여 과업수행에 차질이 있을 경우

○ 다음과 같은 사유가 발생 시에는 과업내용을 변경할 수 있다.

- 발주처 요구로 과업내용이 추가 또는 감소되었을 때

- 발주처의 방침변경으로 과업이 중단 또는 과업내용이 변경되었을 경우

○ 위 각호의 사유로 과업변경 요인이 발생될 시 또는 계약체결 후 예정가격 또는 계약금액의 결정에 하자 또는 착오가 있음이 발견되거나, 기타 계약금액을 감액하여야 할 사유가 발생하였을 때는 해당금액을 당초 금액에서 감액하거나 환수 조치한다.

□ 성과품의 소유

○ 본 용역의 성과품 및 그에 따른 직 ․ 간접적인 저작권, 소유권은 SH공사에 있으며, 용역  기간 중 용역내용에 대하여 타기관이나 타용역에 활용할 경우 SH공사의 사전승인을 얻어야 한다.

□ 용역의 하자 책임

○ 용역수행기관은 조사상의 하자 등으로 인하여 성과품을 업무에 반영하여 상당한 피해를 초래하였을 경우 계약기간 만료에도 불구하고 이에 대한 모든 책임을 진다.

□ 계약 조건

○ SH공사는 다음과 같은 조건이 발생되면 일방적으로 해약할 수 있다.

- 용역수행 및 목적달성이 불가능하다고 인정될 때

- SH공사의 지시에 불응하여 용역을 진행할 때

- 기타 계약조건을 위배할 때

□ 보안 사항

○ 성과품은 용역 수행자가 소유하거나 임의로 복사, 외부로 유출시켜서는 안되며 과업 폐기물은 분쇄 또는 소각 처리하여야 한다.

○ 본 과업수행 종사자의 신상변동이 있을 시는 인계인수를 철저히 하여 자료의 외부유출을 방지하여야 하며, 보안사항 불이행으로 발생되는 모든 책임은 용역 수행자가 진다.

□ 법규의 준수

○ 용역수행자는 용역내용이 모든 제반 법규에 위배되지 않도록 하여야 한다.

□ SH공사의 자료 제공

○ SH공사는 과업수행과 관련하여 자료의 수집 및 행정지원이 필요한 경우 관련 자료 등을 계약자에게 제공할 수 있으며, 용역수행자는 그 내용의 정확성 여부를 확인한 후 사용해야 한다.

○ 용역수행자는 과업에 인용된 자료에 대해 반드시 출처를 명시해야 하며, 부당한 자료의 사용에 대해 책임을 져야 한다.

□ 용역 수행 이행 조건

○ 연구 조사한 내용은 빠짐없이 보고서에 수록하여 제출해야 한다.

○ 본 연구조사 내용은 SH공사의 허가 없이 학술발표, 연구논문 게재, 언론기관 보도 등 공개 발표할 수 없다.

○ 총괄책임자는 각 분야별 추진사항을 수시로 확인 독려하고 적시에 사업이 추진될 수 있도록 하여야 한다.

○ 발주처는 용역기간 중 용역 추진실적 및 진행사항 등을 수시로 확인 또는 자료의 제출을 요구할 수 있으며, 필요시 책임자로 하여금 보고받을 수 있다.

○ 본 과업지시에 명기되지 아니한 사항이라도 필요하다고 인정되는 중요사항은 발주처와 협의하여 결정한다.

○ 과업내용서상의 용어는 일반적인 통념에 따라 해석하며, 발주처와 업무수행자간 해석상 차이가 있을 때에는 발주처의 지시에 따른다.

□ 도서의 작성

○ 문자는 한글사용을 원칙으로 하되 필요한 경우 영문 또는 한문을 병기하여 기록할 수 있다.

○ 중간, 최종보고서 작성시 한글 워드를 사용하되, 보고회 자료는 MicroSoft사의 파워포인트로 사용할 수 있다.

□ 기타 사항

○ 본 과업에 투입된 참여연구원은 과업기간 중 임의로 교체할 수 없으며 교체가 불가피한 경우에는 발주처의 사전승인을 받아야 하고, 발주처는 과업 수행이 부적합하다고 판단되는 연구원에 대하여는 문서로써 교체를 요청할 수 있고 용역수행자는 즉시 교체해야 한다.

○ 본 과업내용서는 과업수행을 위한 제반사항을 규정하는 바, 이에 규정되지 아니한 사항은 SH공사의 관련규정, 관련 법령에 의거 발주처와 협의하여 수행하여야  한다.

○ 용역수행에 따른 경비항목은 용역비에 포함되므로 용역수행자가 이를 부담한다.

○ 용역수행을 위한 시스템 및 기타설비, S/W, 사무용품 등은 용역수행자의 비용으로 확보□운영하여야 한다.

□ 과업 예정공정표(안)

과 업	M				M+1				M+2				M+3				M+4				M+5				M+6
1.현황조사
2.설계기준 수립
3.시공기준 수립
4.관리기준 수립
5.중간보고
6.최종보고

Ⅴ		과업 특수 조건

□ 별도의 추가 학술용역 수행 필요시에 추가업무를 수행하여 보고서를 제출하여야 함(필요시 추가업무비용은 별도 산정)